공사 설계변경 공고

KORAIL 강원지사에서 시행하는 공사의 설계변경에 대하여 우리 공사 「공사‧용역계약업무처리지침」제25조 제2항에 의거 아래와 같이 공고하고 이해 관계자의 의견을 청취하고자 하오니, 의견이 있으신 분은 우리 공사 홈페이지(www.korail.go.kr) 또는 강원지사 경영관리팀 (☎033-520-2218)으로 2008.11.21(금) 16:00까지 연락하여   주시기 바랍니다.

2008년  11월  19일

KORAIL강원지사 계약담당

1. 공사명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사

○ G2B전자계약번호 : 20081022975-00

○ 계약자 : (주)도환  대표이사  최 경 원

2. 현 장 : 강원도 태백시 화전동(정암터널)

3. 설계변경 금액

종 류	구 분	금 차 분(원)	총 체(원)
계약금액	당 초	143,278,000	143,278,000
	설계변경 금액	12,266,000	12,266,000
	변경 후 계약금액	155,544,000	155,544,000

4. 준공기한

◦ 당초 : 2008. 12. 30

◦ 변경 : 2008. 12. 30(변경없음)

5. 설계변경 사유

◦ 벤치플륨관 단면축소 및 포장으로 인한 물량증감

6. 설계변경 내역 (※붙임 설계변경 설계서 참조)