2008 년도
인가번호 : 강지 제2008-63 건 명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사 설계변경(제1회)설계서
KORAIL 강원지사 시설팀장 (주)도환 현장대리인 정 강 훈(인)

년      도 :  2008년도

공사코드채번 : KR - CRG - 08 - 007,  KR - CRD - 08 - 007

품      신 :  강지  제 2008 -  37 -1 호            2008년   11월  14일

인      가 :  강지  제 2008 -        호            2008년    월    일

건   명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사

설계변경(제1회)설계서

( 회  계 )

관)   51 : 영업비용                                    관)   51 : 영업비용

항)   00 : 개량수탁                                    항)   00 : 개량수탁

목)   02 : 공사비                                      목)   02 : 공사비

세목)   26 : 순공사비                                  세목)   26 : 순공사비

사업코드) C3N020101 (재해예방시설개량)                사업코드) C5C010101 (수선유지비)

예산관리센타) 5000815(강원-시설-수탁-개량-일반FC)  예산관리센타) 5000815(강원-시설-수탁-개량-일반FC)

목          차

1. 설계변경 설명서   -------------------------------------------------P

2. 설계변경사유서    -------------------------------------------------P

3. 공사(추가)시방서   -------------------------------------------------P

4. 설계변경예정공정표 -------------------------------------------------P

5. 설계변경 예산내역서 ------------------------------------------------P

6. 설계변경 공종별 예산조서---------------------------------------------P

7. 설계변경 철도공사 직원급 내역서 --------------------------------------P

1. 설 계 변 경 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 건    명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사

나. 위    치 : 강원도 강릉시 중앙동

다. 목    적 : 기존 노후된 블록울타리를 철거 게비온옹벽 설치로 인한 노반보강 및 구조물 수명연장을 위함

라. 공사개요 : 0 게비온 옹벽설치

- 게비온옹벽설치 : 492㎡ ,              - 배수 플륨관설치 : 137m,   휀스설치 : 171m,

- 게비온옹벽설치 : 509㎡ ,              - 배수 플륨관설치 : 137m,   휀스설치 : 209m,

- 줄떼식재 : 1,368㎡,   부대공 : 1식     - 콘크리트포장 : 0 ㎥

- 줄떼식재 : 1,576㎡,   부대공 : 1식     - 콘크리트포장 : 60.8㎥

마. 공사기간 : 2008. 10. 31 ～ 2008. 12. 30

2008. 10. 31 ～ 2008. 12. 30(변동없음)

바. 시행책임자 : 한국철도공사 강원지사장

당 초

변 경

2. 설 계 변 경 사 유 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
공 사 종 류	사 유
- 게비온옹벽 - 벤치플륨관 - 콘크리트포장 - PE이중벽관 - 메쉬휀스 - 줄떼식재 - 폐기물처리	- 물량 변경 : 날개옹벽 훼손부분 추가시공(L=5.0m) - 규격 변경 : 기존도로폭이 협소하며 각종 지장물로 인해 변경시공(400C - 300C) - 물량 변경 : 주민들의 요청과 현장 여건상 추가시공(B=2.0, L=152.0) - 물량 변경 : 주민통행의 불편해소와 원활한 배수를 위해 추가시공(D300, L=15.0) - 물량 변경 : 주민 출입통제와 법면보호를 위해 추가시공(L=38.0 - 물량 변경 : 법면보호를 위해 추가시공(L=26.0) - 물량 변경 : 기존휀스철거, 콘크리트폐기물 증가.

3. 공 사(추 가) 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일반시방

- 당초동일

2. 특별시방

- 당초동일

3. 안전시방

- 당초동일

4. 기타시방

- 당초동일

4. 설 계 변 경 예 정 공 정 표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 종 류	단위	수량	공 사 기 간																							기 사
			5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60
전 체 공 정	일	70																								당초 변경
준 비 작 업	일	2
게비온옹벽설치	㎡	492 509
벤치플륨관설치	m	137 137
법면보호공	식	1
콘크리트포장	㎡	3
뒷정리	일	3

건 명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사
	5. 설 계 변 경 예 산 내 역 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	총 공 사 비		당 초	변 경	증 감
	1	도 급 공 사 비	143,278,000	155,544,000	(증)12,266,000
	2	지급 자 재 비 (당기조달품)
	3	지급 자재비(전년도 조달품)
	4	지 급 자 재 비(중고품)
	5	지급자재비 (레미콘, 충용품)
	6	철도공사제공 기계기구 사용료
	7	철 도 공 사 직 원 급	1,281,000	1,281,000
	8	철도공사직원급 일 반 관 리 비
	9	재 료 일 반 관 리 비
	10	운 송 비
	11	계 약 수 수 료

6. 설 계 변 경 공 종 별 예 산 조 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 종 류	규 격	단위	당 초			변 경			증 감
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액	수량	금액
1. 토 공
터파기		㎡	672	4,869	3,271,968	672	4,869	3,271,968	0
되메우기		“	297	2,041	606,177	297	2,041	606,177	0
계		“			3,878,145			3,878,145
2. 옹 벽 공
게비온옹벽설치	1.0*1.0*2.0	㎥	492	125,337	61,665,804	509	125,337	63,796,533	17	2,130,729
부직포설치	t=2mm	㎡	338	551	186,238	349	551	192,299	11	6,061
벤치플륨관설치	400c	m	137	41,428	5,675,636	0	41,428	0	0	-5,675,636
벤치플륨관설치	300c	m	0	0	0	137	40,168	5,503,616	0	5,503,616
콘크리트포장	t=20cm	㎥	0	0	0	60.8	71,285	4,334,127	60.8	4,334,127
PE이중벽관	D300	m	0	0	0	15	23,230	348,450	15	348,450
계					67,527,678			74,127,425		6,646,747
3.법면보호공
메쉬휀스설치	(1500*2500)	m	171	51,033	8,726,643	209	51,033	10,665,897	38	1,939,254
기초콘크리트운반	(200*300*400)	식	1	53,446	53,446	1	53,446	53,446	0
줄떼식재		㎡	1,368	4,597	6,288,696	1,576	4,597	7,244,872	208	956,176
계					15,068,785			17,964,215		2,895,430

공 사 종 류	규 격	단위	당 초			변 경			증 감
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액	수량	금액
4. 부 대 공
폐기물처리		ton	86.83	22,218	1,929,188	92.7	22,218	2,059,607	5.87	130,419
열차감시자		일	40	104,573	4,182,920	40	104,573	4,182,920	0
도로차량통제자		일	40	104,573	4,182,920	40	104,573	4,182,920	0
계					10,295,028			10,425,447		130,419
5.간접노무비		식	1		5,135,000	1.047		5,368,000	0.047	233,000
6.산재보험료		식	1		1,928,000	1.047		2,016,000	0.047	88,000
7.고용보험료		식	1		358,000	1.047		375,000	0.047	17,000
8.건강보험료		식	1		835,000	1.0		835,000	0
9.연금보험료		식	1		1,363,000	1.0		1,363,000	0
10.안전관리비		식	1		2,289,000	1.047		2,398,000	0.047	109,000
11.환경보전비		식	1		290,000	1.047		304,000	0.047	14,000
12.기타경비		식	1		5,068,000	1.047		5,311,000	0.047	243,000
13.일반관리비		식	1		5,359,000	1.047		5,615,000	0.047	256,000
14.이 윤		식	1		10,858,092	1.047		11,376,405	0.047	518,313
공급가액					130,252,728			141,403,637		11,150,909
부가가치세					13,025,272			14,140,363		1,115,091
도급금액					143,278,000			155,544,000		12,266,000

7. 설 계 변 경 철 도 공 사 직 원 급 내 역 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 종 류	규 격	단위	당 초			변 경			증 감
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액	수량	금액
(공사감독여비)
팀 원		일	60	21,000	1,260,000	60	21,000	1,260,000
계					1,260,000			1,260,000
(준공검사여비)
차 장		일	1	21,000	21,000	1	21,000	21,000
계					21,000	1		21,000
합 계					1,281,000			1,281,000

2008 년도
인가번호 : 강지 제2008-37호 건 명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사 설계변경(제1회) 설계도
	확 인 자	감 독 자	김 택 동 (인)
	작 성 자	현장대리인	정 강 훈 (인)
KORAIL 강원지사 시설팀장

2008 년도
인가번호 : 강지 제2008-13호 건 명 : 영동선 안인-강릉간 192k050부근 게비온옹벽 설치 기타공사 설계변경(제1회)수량산출서
	확 인 자	감 독 자	김 택 동 (인)
	작 성 자	현장대리인	정 강 훈 (인)
KORAIL 강원지사 시설팀장