남면 지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 용역

과  업  지  시  서

2008.

태  안  군

(상하수도사업소)

목    차

Ⅰ. 총  칙	1

1.0 과업의 개요	1

1.1 과업명	1

1.2 과업의 목적	1

2.0 과업의 범위	1

2.1 과업위치	1

2.2 현지조사	1

2.3 기본 및 실시설계	1

3.0 과업의 기간	2

Ⅱ. 과업수행방법	2

1.0 과업의 내용	2

1.1 현지조사	2

1.1.1 조사측량	2

1.1.2 지질조사	3

1.2 기초현황조사 및 기본계획	4

1.2.1 기초현황조사	4

1.2.2 용수수요조사 및 계획	5

1.2.3 배수시설	5

1.2.4 용지 및 지장물 보상조사	5

1.3 기본 및 실시설계	5

1.3.1 공통사항	5

1.3.2 토공	6

1.3.3 구조물공	6

1.3.4 관로설비	6

1.3.5 건축시설	6

1.3.6 전기설비	7

1.3.7 계장 및 통신설비	8

1.3.8 기타	8

1.4 도시계획의 시설의 결정(각종영향성검토)	9

1.4.1 일반사항	9

1.4.2 분야별 주요업무내용 참조사항	9

1.5 사업집행계획의 수립	10

1.5.1 사업비산정	10

1.5.2 년차별 투자계획 및 재원조달계획	10

2.0 과업준수사항	10

2.1 일반사항	10

3.0 성과품	12

4.0 예정공정표	13

Ⅰ. 총   칙

1.0 과업의 개요

1.1 과업명

남면 지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 용역

1.2 과업의 목적

본 사업은 남면 일원에 송․배수관로 및 배수지 신․증설을 통하여 개발계획지역과 계획급수지역에 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급함으로써, 지역경제 활성화 및 지역주민의 생활수준 향상을 도모하는데 목적이 있음.

2.0 과업의 범위

2.1 과업위치

ｏ 태안군 남면, 근흥면 일원

2.2 현지조사

가. 조사측량

－ 수도노선측량 : 15.8km

－ 지형현황측량 : 배수지 2개소 3,417㎡ (신설 : 1,333㎡,  증설 : 2,083㎡)

나. 지질조사

－ 지질조사(육상NX) : 7공 (배수지 : 3공, 송․배수관로 : 4공)

다. 용지조사

-  용지조사 : 82,417㎡ (배수지 : 3,417㎡, 송․배수 관로 : 79,000㎡)

2.3 기본 및 실시설계

◦남면지방상수도 확충사업

－ 송․배수관로 : D=100～600㎜, L=10.8㎞

－ 배수지 : 신설 (V=1,600㎥), 증설 (V=2,500㎥)

- 부대시설 : 기계, 전기, 계장, 건축 등

◦소원가압장 유입 송수관로 확장

- 송수관로 : D=400㎜, L=5.0㎞

3.0 과업의 기간

과업은 착수일로부터 120일간으로 한다.

단, 아래와 같은 사유가 발생했을 시는 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

1) 과업수행 중 정책적인 변화가 있을시

2) 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

3) 발주처의 사정 및 계획변경에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

Ⅱ. 과업수행방법

1.0 과업의 내용

1.1 현지조사

1.1.1 조사측량

가. 일반사항

1) 본 측량은 공공측량 작업규정에 의한다.

2) 수준 측량에서 수준점은 국립지리원에서 설치한 것을 사용하여야 하며,  1등 BM 2개 이상의 수준점을 연결하여 검측 실시한 후 이상이 없을 경우 측량을 실시하고, 사업장 인근에 공사 준공시까지 보존할 수 있는 위치에 임시 수준점을 1개 이상 견고히 설치하여야 한다.

3) 지하매설물 및 지장물 조사

지하매설물(통신케이블 등)과 지장물( 전주, 묘지, 농작물 등)을 철저히 조사하여야 하며, 형상, 규격 및 표고 등을 조사한다.

4) 지적도 및 임야도는 우리 군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하여 작성한다.

나. 노선측량

1) 축척은 1/1,000로 실시하고, 측점거리는 20m를 원칙으로 하되, 종단변화가 심한 곳은 추가로 중간측점을 설치한다.

2) 노선측량 폭은 20m로 하며, 도로 양측에 가옥 등 지장물을 표시한다.

3) 지표면위의 현황 및 지하의 구조물을 측량하여 평면도에 표시하여야 한다.

4) 인근의 CP, IP, TBM 점 등의 위치를 평면도에 표시하고 측량성과를 표기하여야 한다.

다. 지형현황측량

1) 배수지 부지에 대하여는 축척 1 : 500으로, 진입도로, 관로에 대해서는 1:1,000 으로 지형현황 측량을 실시한다.

1.1.2 지질조사

가. 일반조사

1) 본 지질조사는 가압장 및 배수관로 설계에 필요한 제반 기초자료를 제공하기 위한 지질조사를 실시한다.

2) 본 지질조사는 KS, ASTM 및 관련 시방서의 규정 및 감독원의 지시에 따라 수행하여야 한다.

3) 감독원은 조사기간 중 또는 완공 후에 조사결과 및 감독원의 판단에 따라 조사계획의 수정을 지시할 수 있으며, 수급자는 이에 따라 필요한 제반조치를 취하여야 한다.

4) 수급자는 현장조사시 자격을 갖춘 토질 및 지질기술자를 현장에 상주시켜야 한다.

나. 시추 및 토질조사

1) 조사위치 측량

수급자는 확정된 시추지점에 대하여 위치측량을 실시하고, 표고 및 좌표에 관한 성과를 제출하여야 한다.

2) 시추 및 토질조사

(1) 수급자는 상황의 변동이 있을시 감독원의 지시에 따라 위치를 조정할 수 있다.

(2) 지질조사의 상황의 변동이 있을시 시추조사, 표준관입시험, 실내시험을 포함하여 설계자료로 이용될 수 있도록 한다.

(3) 수급자는 다음과 같은 현장사진을 천연색으로 촬영하여 사진첩을 작성하여야 한다.

ｏ 시추작업 광경

ｏ 현장시험 광경

ｏ 코아상자 내부광경(심도 및 코아상태를 확실히 알 수 있도록 할 것)

(4) 조사성과는 보고서에 수록되어야 하며, 다음 사항이 포함된다.

ｏ 보고서 (토질공학적 자료를 종합분석한 후 순서에 따라 기재하여야 함)

ｏ 시추주상도

ｏ 시추단면도 및 각종 토질단면도

ｏ 현장시험 성과계산서

ｏ 사진첩

3) 현장시험

(1) 매 1.0m 혹은 지층 변화시마다 KSF-2318에 규정한 대로 표준관입 시험을 실시하여야 하며, 상호 협의하에 조정할 수 있다.

(2) 기타 시추공을 이용한 현장시험은 감독원의 지시에 의한다.

4) 실내시험

채취된 시료들 중에서 토사 및 암석의 대표적인 시료를 선정하여 기본물성시험(함수량, 비중, 액성한계, 소성한계, 입도 등)을 실시한다.

1.2 기초현황 조사 및 기본계획

1.2.1 기초현황조사

가. 수도시설 현황조사

ｏ 기존 배수시설

나. 토지이용계획

ｏ 도시계획 및 관광지 조성 계획 등 조사

ｏ 본 과업수행과 관련된 기 연구자료 및 타계획 수립 또는 시행시 조사된 자료

ｏ 관련 상위계획(국토종합개발계획, 도종합개발계획, 수도정비에 관한 계획 등)

ｏ 기타 관련자료

1.2.2 용수수요조사 및 계획

1) 급수대상 지역에 대한 년차별 용수수요량을 검토한다.

2) 최적의 용수공급이 가능한 가압장 및 관로의 용량을 검토한다.

3) 배수지 및 진입도로의 위치선정을 한다.

1.2.3 배수시설

1) 배수시설은 배수지 높이를 고려 균등급수 및 시설기준에 적합한 수압이 조정되도록 선정하여야 한다.

2) 배수관로는 가능한 도로부지를 이용하되 장래 관로 확장계획을 고려 관경을 결정하고 관종은 현재 이용되고 있는 수도관의 장, 단점을 비교 검토 시공성, 경제성, 수질에 미치는 영향 등을 종합 분석하여 적절한 자재를 선택한다.

3) 배수지는 가능한 무인 SYSTEM으로 하되 수위가 자동제어 될 수 있는 SYSTEM으로 한다.

1.2.4 용지 및 지장물 보상조사

1) 보상조사는 보상계획 구역내 토지, 가옥, 묘지, 공공시설 등 일체의 보상물건에 대하여 토지대장, 건축물대장 등을 기준으로 개개물건에 대하여 상세히 조사한다.

2) 본 사업시행에 따라 보상이 필요한 부지에 대하여 편입용지, 지장물 조사를 실시하여 용지조서를 작성한다.

1.3 기본 및 실시설계

1.3.1 공통사항

1) 각종 기준은 건설교통부가 제정한 제반 시방서, 설계기준, 표준도, 표준품셈, 당시 설계기준 및 자체기준을 적용하여 작성하여야 하며, 한국수도협회 발행 상수도 시설기준 또는 제반 공공단체가 발행한 자료를 적용하되, 그 근거를 명시하여야 한다.

2) 도시구간 등 주민이 밀집되어 있는 구간의 공사계획시에 소음, 진동, 분진방지를 위하여 제반 기준에서 정한 공해방지공법을 강구하여야 한다.

1.3.2 토  공

1) 관로 및 구조물의 토공 및 정지계획 등은 각종 구조물의 운영상 편리하고 기초지반을 확보할 수 있도록 계획한다.

2) 절토, 성토의 구배는 절․성토 높이, 토질, 지하수 상태 등을 감안하여 결정하고, 구조물 주변의 절․성토부 처리방법은 구조물의 특성 및 기능적인 면을 감안하여 설계되어야 한다.

3) 주요 시설물 구축을 위하여 필요하다고 판단되는 가시설에 대하여는 이에 대한 상세도면 및 수량 산출근거, 공법비교, 공사시행이 가능한 공법을 제시하여야 한다.

1.3.3 구조물공

1) 물과 접하는 부분의 콘크리트는 콘크리트 표준시방서의 수밀 콘크리트 시공기준에 준하여야 하며, 방수대책을 강구하여야 한다.

2) 구조물 설계시 지하수에 의한 양압력을 고려하여 구조물의 안정성을 검토하고 그 대책을 강구하여야 한다.

3) 수밀구조물의 시공 이음부나 신축이음부에는 누수가 되지 않도록 지수대책을 검토하고 그 위치 및 재질은 구조물의 경도나, 기능, 외관을 손상시키지 않도록 결정하여야 하며 설계시에는 간격, 배치등을 설계도에 명기하여야 한다.

1.3.4 관로설비

1) 관로노선 선정시는 공사비, 공사의 난이도, 용지확보, 유지관리, 장래도로 확장계획, 지하매설물 계획 등을 종합적으로 검토하여 가장 적합한 노선으로 가급적 직선화하도록 설계하여야 한다.

2) 관의 내압 및 외압결정, 라이닝 도복방법의 선정 및 경제성 등 종합적으로 검토 하여 관종을 결정하여야 한다.

3) 곡관 보호공 등 기타 부대시설 및 변류시설에 대하여 설계에 반영하여야 한다.

1.3.5 건축시설

1) 건축설계는 건축법상 자격이 있는자가 설계를 하여야 하며, 건축법 및 전기사업법, 소방법, 상수도 시설기준, 철근 콘크리트 구조계산 등 관련  법규에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

2) 실내외 마감재는 시설물의 유지관리, 상징성을 고려한 마감계획(색상 포함)을 작성하여 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

1.3.6 전기설비

1) 수전계획은 공사계획 기간별 및 계획완성시의 전력 및 상황을 고려하여 설계하여야 한다.

2) 수전방식에 대한 사항은 설비의 운영(건설, 운전, 유지관리)에 가장 적합한 방식을 선정하여 방침을 정하여야 한다.

3) 설비형식은 현장의 주위상황, 조건에 대한 고려, 장래의 증설에 대한 확장성, 안정성, 유지관리에 대한 에너지 절감을 고려 선정하여야 한다.

4) 주요 부하의 제어방식은 부하변동에 대응할 수 있는 최적 운전제어 방식과 자동운전제어 방식을 비교 검토하여야 한다.

5) 종합 감시제어 방식은 시스템을 집중 또는 분산제어의 이해득실의 사항을 비교 검토하고, 감시반, 조작데스크 형식, 조작방식을 선정하여야 한다.

6) 제어전원방식에 대한 것은 전원분할, 무정전 공급방식, 전압 안정대책에 대한 것이 검토되어야 한다.

7) 설비기기는 각 회로의 채용기종에 대한 채용이유, 타 방식과의 비교 검토된 후 최적의 기기를 선정하여야 한다.

8) 기기배치도(간선계통 포함)는 각 설비별 전기기기 배치, 주요 간선경로(배선방식)로 구분하여 표시하여야 한다.

9) 기기외형도 주요기기, 배전반, 감시반, 조작반, 현장조작반으로 구분 작성되어야 한다.

10) 배선도 및 배선 상세도는 간선, 동력, 제어, 접지, 건축부대설비 등으로 나누어 작성되어야 한다.

11) 흐름도 작성은 감시제어방법, 계측개소로 구분하여 작성하되 공증별 공사한계가 인터페이스상의 문제를 고려하여 책임의 한계를 명확히 구분하여야 한다.

12) 시설공사와 주요자재 구매로 분리하여 작성하여야 한다.

13) 설비별 용량산정은 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 적용한 상수(또는 계수)등에 채택근거 제시

- 변압기 용량계산서(특고, 고압, 저압조명, 건축부대 등 부하계산서)

- 케이블 사이즈 계산서 <허용전류(연속 및 단락), 전압강하>

- 조도계산서

- 기타 감독이 요구하는 자료

1.3.7 계장 및 통신설비

가. 공통사항

본 사업은 급수대상지역이 안정적인 용수공급을 위하여 송수시설과의 연계운영이 불가피한 점을 감안하여 각 시설간 원격 감시제어 시스템이 구축되어야한다.

나. 계장설비

1) 계장설비의 시스템 구성, 배치, 조작, 감시제어방안은 신뢰성, 안정성, 경제성, 기능성, 장래 확장성 등을 비교 검토하여 가장 효율적인 방안으로 설계하여야 한다.

2) SYSTEM 기능은 감시제어 대상에 대한 원격 및 현장조작이 가능하도록 설계하여야 한다.

3) 수처리 시설 전체를 대상으로 하여 아래사항을 충분히 검토하여야 하며, 주요내용을 포함하여야 한다.

(1) 양적관리 (수위, 유량, 압력등)에 필요한 감시제어 사항 및 검출기 검토

(2) 질적관리에 필요한 감시제어사항 및 검출기 검토

(3) 계장설비 조작 계통도

(4) 사업장 원격제어에 대한 검토

(5) 출입자 감시 방안

1.3.8 기타

수도관련 규정 및 상수도 시설기준(환경부 발행)에 준용한다.

1.4 도시계획시설의 결정 (각종 영향성 검토)

1.4.1 일반사항

가. 본 과업은 환경,재해,교통등에 미칠 영향을 최소화하고 환경친화적인 사업이 될 수 있도록 사업 시행전에 조사․분석하고 이를 토대로 예측․ 평가하여 저감방안을 강구하기 위하여 작성한다.

나. 환경․교통․재해등에 관한 평가법제29조의 규정에 의한 환경영향평가서작성등에 관한 규정(환경부고시2004-209호) 및 같은법제16조의 규정에 의한 환경영향평가서 작성비용 산정기준(환경부고시2001-29호), 환경정책기본법시행령 제4조 제1항 제4호의 규정에 의한 사전환경성검토 구비서류에 관한규정(환경부고시제2005-170호) 등에 준하여 사전환경성 영향검토를 시행하고 국토의 계획 및 이용에관합법률 제 24조내지 제 30조, 동법시행령 제 2조 도시계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한규칙,도시관리계획 수립지침8-2-2-8 등에 의거 도시관리계획을 수립하며 자연재해대책법 시행령 제 3조(영향성검토 포함사항) 및 재난안전대책본부 고시 제2005-18호(사전재해영향성 검토항목 및 방법)등에 준하여 사전재해영향성검토를 시행하며 건설교통부의 교통영향평가 지침 및 산정기준(내용-건설교통부고시2000-358호)에 준하여 교통영향평가를 시행하며 사업이 친환경적으로 이뤄질수 있도록 경관계획 및 사전환경성 검토가 이뤄져야 함.

다. 본 과업은 과학적인 사실에 근거를 두고 객관적, 논리적으로 기술하여야  하며, 학식과 경험이 풍부한 기술자가 본과업에 참여하도록 한다.

라. 본 과업지시서에 명기하지 않은 사항이라도 환경관계법령 및 관련법령 등의 규정에 의하여 필요하다고 인정되는 사항은 감독공무원과 협의하여 결정하고 이에 소요되는 경미한 비용은 과업수행자의 부담으로 한다.

마. 본 과업에 참여하는 책임자 및 기술자는 각 분야별로 해당분야 자격을 갖추어야 하며 도시계획 시설결정 및 각 영향성검토는 과업완료전에 관련부서와 협의 완료하여 보완사항이 있을시 성과품 및 실시설계에 반영 조치하여야 한다.

1.4.2 분야별 주요업무내용 참조사항

가. 도시계획 시설결정 :국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 24조~30조, 도시계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한규칙,도시관리계획 수립지침

나. 사전환경성검토 : 환경영향평가서작성등에 관한 규정(환경부고시2004-209호), 환경영향평가서 작성비용 산정기준(환경부고시2001-29호), 사전환경성검토 구비서류에 관한규정(환경부고시제2005-170호)

다. 사전재해영향검토 : 자연재해대책법 시행령 제 3조(영향성검토 포함사항) 및 재난안전대책본부 고시 제2005-18호(사전재해영향성 검토항목 및 방법),소방방재청 고시 제2004-17호(산정기준의 업무내용)

라. 교통성 검토 : 교통영향평가지침(국해부 고시 제2008-99호) 및 산정기준(국해부 고시제 2008-358호)의 업무내용

마. 자연경관성 검토 : 도시개발계획 품셈의 경관계획 업무내용

1.5 사업집행계획 수립

1.5.1 사업비 산정

1) 사업비는 공사비, 보상비, 감리비 및 예비비등을 주요 공정별로 세분 산정한다.

2) 공사수량 개선 및 공사비 산출기준은 건교부 제정 표준품셈, 태안군 자체기준, 가격정보(조달청)에 의거 적산하여야 하며, 여기에 없는 항목은 거래가격, 물가자료, 유통물가 등 시세표에 의거 산정한다.

1.5.2 년차별 투자계획 및 재원조달 계획

사업시행을 위한 주요 공정별 년차별 투자계획을 수립하고 재원조달 계획을 수립한다.

2.0 과업 준수사항

2.1 일반사항

가. 본 과업수행상 필요한 제반 규정은 정부가 제정 공포한 관계법률 및 용역규정에 준하고 기타사항은 본 과업지시서에 의거 시행한다.

나. 계약자는 계약일로 부터 7일이내에 본 과업수행에 관한 설명과 지시를 받아야하며 과업수행을 위한 착수계, 현장대리인계를 지시받은 날로 부터 15일이내 제출 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 과업의 진행

1) 과업이 착수되면 익월 10일까지 전월공정 및 금월계획을 감독관에게 보고하여야 하며 공정이 지연될 경우 공정이 만회되도록 대안을 강구한다.

2) 과업중 다음 공정 진행전 감독관의 검토를 받은 후 진행하여야 한다.

ｏ 현황측량 성과 및 지질보고서 결과 : 원도 제출 및 지질보고서 2부

ｏ 구조물(관로 포함)배치 결정 전, 후

ｏ 각 SYSTEM 결정전

ｏ 내역서 산출전

마. 보안대책 수립

1) 본 과업수행에 있어 완주군에서 정한 보완관계규정에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의를 요하여 이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 진다.

2) 도급자는 착공계 제출시 대표자 및 과업참여 종사자의 인적사항 및 보안각서를 함께 제출한다.

3) 과업 중 또는 종료 후라도 과업목적 및 내용 성과품 일체를 타인에게 발설하여서는 아니되며 폐기물은 일괄 소각처리 한다.

4) 기타 보안사항에 대하여 감독관 요구가 있을시 이에 응한다.

바. 과업의 변경

1) 본 용역 과업에 대하여 우리군의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 상위계획 등 관련계획 변경으로 과업 범위가 변경될 때

3) 당초 계획과 과업 내용이 변경될 때

사. 기타사항

1) 본 과업수행에 있어서 어구 해석이 필요한 경우는 쌍방이 협의 후 시행하고 의견에 합의치 못할 경우 태안군 의견에 따른다.

2) 본 과업수행중 발주처 사정 또는 계획변경에 의거 용역변경을 요할 시는 용역비 설계변경을 할 수 있다.

3) 본 과업수행 중 계획변경, 천재지변, 기타 특수한 사정이 있을 경우 과업을 중지하거나 변경할 수 있으며, 당해 사유 발생시 과업기간을 연기할 수 있다.

4) 적용품은 당해년도 단가기준으로 하며 현지여건 및 시공성 등을 고려 적정품을 적용한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 용역업자는 항상 국가이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경제적 기술적 검토를 통하여 경비를 최소한으로 절감하는데 필요한 모든 정당한 조치를 취한다.

3.0 성과품

용역 결과 성과품은 다음과 같이 납품한다.

1) 기본 및 실시설계 보고서        : 20부

2) 기본 및 실시설계 보고서(부록)  : 20부

3) 설계도면

-  트 레 싱 원 도             :  1부

-  청 사 진(A1)               :  5부

-  축소도면(A3)               :  10부

4) 설계도서	:  10부

-  설 계 예 산 서

-  수 량 산 출 서

-  단 가 산 출 서

-  수리 및 구조계산서

-  시    방    서

5) 도시계획시설의 결정(각종 영향성 검토) 및 관련기관 협의서류  :  1식

6) 지방상수도 인가 및 관련기관 협의서류                        :  1식

7) 측량성과표 (원본 및 야장 포함)                               :  1식

8) 용지도 및 용지조서, 지장물 조서                              :  5부

9) 토질조사 보고서	:  5부

10) 사업인가, 건축협의 서류 일체	: 1식

11) 기타 자료	: 1식

4.0 과업기간

• 착수일로부터 120일간

공 종	공정율 (%)	과 업 기 간 (착수일 기준)
		20	40	60	80	100	120
1. 기초자료 조사	5.0	5
2. 현장조사 및 검토	10.0	10
3. 기본 및 실시설계	50.0		10	20	20
4. 사업집행계획 수립	10.0				10
5. 과업성과품 작성	5.0				5
6. 인 허 가	20.0					10	10
계	100.0	15	10	20	35	10	10