2008년도 전기부문 표준품셈 제ㆍ개정내용

2009. 1. 1

대 한 전 기 협 회

목    차

Ⅰ. 항목별 제ㆍ개정 내용	1

Ⅱ. 직종 변경 공종	53

Ⅰ. 항목별 제ㆍ개정 내용

제1장   적 용 기 준

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	개 정	1-11	주요 자재	8
2	개 정	1-15	제 경비	8
3	개 정	1-17	산업재해보상보험료 및 기타	8
4	개 정	1-20	운반차량의 구분	9
5	개 정	1-30	인력운반 및 적상하 시간기준	10
6	개 정	1-31	경운기 운반 및 적상하 시간 기준	10
7	개 정	1-33	전차선 가설 차단공사 할증률	10
8	개 정	1-48	기계시공 적용기준	11
9	개 정	1-50	기계경비의 경비산정	12
10	개 정	1-52	운전경비 산정	13

제2장   송전설비공사

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	개 정	2-5-2	관형지지물 기계 시공	14
2	개 정	2-6-5	가설작업대 설치	14
3	제 정	2-11-7	작업받침대(써포트 지지형)설치 및 철거	15
4	개 정	2-28-5	철탑피뢰기 설치	16
5	개 정	2-30-1	철탑 점검	16
6	개 정	2-30-4	전선 접속개소 점검	17

제3장   변전설비공사

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	개 정	3-4	단상 154kV 15MVA 변압기 설치	18
2	제 정	3-4-1	단상 154kV 15MVA 가스절연변압기 설치	18
3	개 정	3-9	22kV 진공차단기 설치	19
4	개 정	3-10	154kV급 가스차단기 설치	19
5	개 정	3-11	154kV GCB(Dead Tank Type)기계화설치	20
6	개 정	3-12	345kV급 가스차단기 설치	20
7	개 정	3-13	345kV GCB(Dead Tank Type)기계화설치	21
8	개 정	3-17	154kV급 피뢰기	21
9	개 정	3-39	보링접지 신설	21
10	제 정	3-41-1	Crane용 Trolley선 신설	22
11	개 정	3-50	154kV GIS 가공T/L BAY	22
12	개 정	3-51	154kV GIS T/L 상부 BUS BAY	23
13	개 정	3-52	154kV GIS 지중T/L BAY 설치	23
14	개 정	3-53	154kV GIS T/R BAY 설치	24
15	개 정	3-54	154kV GIS BUS TIE BAY 설치	24
16	개 정	3-55	154kV GIS T/R 상부 BUS BAY 설치	25

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
17	개 정	3-56	154kV GIS P.T BAY 설치	25
18	개 정	3-57	154kV GIS BUSING 설치	26
19	개 정	3-58	154kV GIS GIB BAY 설치	26
20	개 정	3-58-1	154kV GIS 내장 LINE P.T 설치	27
21	개 정	3-58-2	154kV GIS 내장 L.A 설치	27
22	개 정	3-58-3	154kV 단상 GIB 설치	28
23	개 정	3-62-1	Cable Plug In 접속	28
24	개 정	3-63	345kV GIS CB	28
25	개 정	3-64	345kV GIS Feeder 인출측 DS(ES) 설치	29
26	개 정	3-65	345kV GIS [DS(ES)+모선] 설치	29
27	개 정	3-119	154kV GCB 점검	29
28	개 정	3-122	DS(66kV 수동조작형) 점검	30
29	개 정	3-123	DS(66kV) 점검	30

제4장   배전설비공사

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	개 정	4-1	콘크리트 전주 인력건주	31
2	개 정	4-2	콘크리트 전주 기계건주	31
3	제 정	4-10-1	다기능 전선가선 기계화공법	32
4	개 정	4-35	전력케이블 지중 기계포설	33
5	개 정	4-40	지상설치형 변압기 기계설치	33
6	제 정	4-42-1	지상기기 내부청소	34
7	제 정	4-68-5	지상변압기 무정전 교체공법	35
8	제 정	4-68-6	지상변압기 엘보접속재 활선분리 연결	35
9	개 정	4-76	수목가지치기 작업	36
10	개 정	4-84-6	데이터베이스 구축	36
11	제 정	4-87-3	자동화 개폐기 투입.개방시험	37
12	개 정	4-92-7	제어함 제어부 점검	37

제5장   내선설비공사

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	개 정	5-1	전선관 배관	38
2	개 정	5-3	박스(BOX) 설치	39
3	개 정	5-7	금속덕트 설치	40
4	개 정	5-13	제어용 케이블 설치	41
5	개 정	5-42	피뢰침 설치	42
6	개 정	5-43	자가발전기 설치	42
7	개 정	5-44	태양광 발전시스템 설치	43
8	개 정	5-46	교통신호등 설치	44

제7장 전기철도의 전기설비공사

번 호	구 분	항 목	제 목	페이지	비 고
1	제 정	7-24-1	강관빔 설치	45
2	개 정	7-27	하수강 설치	46
3	개 정	7-31	가동브래키트 설치	46
4	제 정	7-31-1	평행틀 설치	47
5	개 정	7-32	곡선당김장치 설치	47
6	개 정	7-39	행거 및 드롭바 설치	48
7	개 정	7-42	흐름방지장치 설치	48
8	개 정	7-43	균압장치 설치	49
9	개 정	7-44	교차 및 수평장치 설치	49
10	개 정	7-45	구분장치 설치	50
11	개 정	7-52	급전선 인류 설치	50
12	개 정	7-54	애자설치	50
13	개 정	7-56	전주방호책 설치	51
14	제 정	7-60-1	전철주 RL 표시	51
15	제 정	7-60-2	전차선로용 피뢰기 설치	52
16	제 정	7-60-3	전차선로용 볼트, 너트 교체	52

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	1-11 주요자재 [가] 공사에 대한 주요자재의 관급은 국가를 당 사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제 83조) 및 재정경제부의 회계예규 등 관계규 정이나 계약조건에 따른다. [나] ~ [라] 생략	1-11 주요자재 [가] 공사에 대한 주요자재의 관급은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제83조) 및 기획재정부의 회계예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다. [나] ~ [라] 생략
개 정	1-15 제 경비 공사원가에 대한 경비 계상은 재정경제부 회계예규인 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙 또는 실적공사비에 의한 예정가격 작성준칙에 따른다.	1-15 제 경비 공사원가에 대한 경비 계상은 기획재정부 회계예규인 원가계산에 의한 예정가격 작성기준 또는 실적공사비에 의한 예정가격 작성기준에 따른다.
개 정	1-17 산업재해보상보험료 및 기타 [가] 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비 이윤과 산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 재정경제부 회계예규와 산업재해보상보험법 등 관계 규정에 따른다. [나] 생략	1-17 산업재해보상보험료 및 기타 [가] 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비 이윤과 산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 기획재정부 회계예규와 산업재해보상보험법 등 관계 규정에 따른다. [나] 생략

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	1-20 운반차량의 구분 [가] 생략 [나] 화물자동차(용달차 포함)의 운반비(전세차량 비)는 재정경제부장관이 지정한 가격조사기 관에서 발행하는 물가정보지 또는 거래 실 례가격을 적용하며, 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 계상한다. [산정공식] (1) 운반비 산출 (가) 차량운반비(원)=(계산차량대수×전세차량 비) + 총 상하차임 계산차량대수 = [eqn: {1} over {480} `[T _{1} +`T _{2} ]] T1(총주행소요시간:분)= [eqn: [ {L} over {V _{1}} (1+ alpha )+ {L} over {V _{2}} ]` TIMES 60` TIMES N] “이하 생략” α: 품목별 할증률 및 할인율 (건설교통부 운임 및 요금표상의 할증 및 할인 해당분에 한함)	1-20 운반차량의 구분 [가] 생략 [나] 화물자동차(용달차 포함)의 운반비(전세차량 비)는 기획재정부장관이 지정한 가격조사기 관에서 발행하는 물가정보지 또는 거래 실 례가격을 적용하며, 싣기 및 부리기에 대한 경비는 별도 계상한다. [산정공식] (1) 운반비 산출 (가) 차량운반비(원)=(계산차량대수×전세차량 비) + 총 상하차임 계산차량대수 = [eqn: {1} over {480} `[T _{1} +`T _{2} ]] T1(총주행소요시간:분)= [eqn: [ {L} over {V _{1}} (1+ alpha )+ {L} over {V _{2}} ]` TIMES 60` TIMES N] “이하 생략” α: 품목별 할증률 및 할인율 (국토해양부 운임 및 요금표상의 할증 및 할인 해당분에 한함)

구  분

현     행

개  정 (안)

비   고

개    정

1-30 인력운반 및 적상하 시간기준

[가] 생략

[나] 품종별 적상하기준

품 종 별		단위	편성 인원	시간 (분)		전 공	보 통 인 부
				적상	적하
CP 전주	10ｍ이하	본	12	15	10	0.375	0.375
	11ｍ이상	본	20	15	10	0.625	0.625
애 자 류		톤	6	14	10	0.18	0.18
철 재 류		톤	6	10	8	0.135	0.135
전 선 류		톤	15	15	10	0.47	0.47
근 가 류		톤	5	14	10	0.15	0.15
비 계 목 류		톤	4	21	12	0.165	0.165
시 멘 트 류		톤	5	14	10	-	0.30

① ~ ⑤ 생략

1-30 인력운반 및 적상하 시간기준

[가] 현행과 동일

[나] 품종별 적상하기준

품 종 별		단위	편성 인원	시간 (분)		전 공	보 통 인 부
				적상	적하
CP 전주	10ｍ이하	본	12	15	10	0.313	0.313
	11ｍ이상	본	20	15	10	0.521	0.521
애 자 류		톤	6	14	10	0.15	0.15
철 재 류		톤	6	10	8	0.113	0.113
전 선 류		톤	15	15	10	0.391	0.391
근 가 류		톤	5	14	10	0.125	0.125
비 계 목 류		톤	4	21	12	0.138	0.138
시 멘 트 류		톤	5	14	10	-	0.25

① ~ ⑤ 현행과 동일

개     정

1-31 경운기 운반 및 적상하 시간 기준

[가] 경운기 운반비 산출공식

(1) ～ (2)  생  략

(3) 경사지 운반 환산계수(α) : 1-38

인력운반 및 적상하 시간기준 [가](3)항 적용

[나] 생  략

1-31 경운기 운반 및 적상하 시간 기준

[가] 경운기 운반비 산출공식

(1) ～ (2)  현행과 같음

(3) 경사지 운반 환산계수(α) : 1-30

인력운반 및 적상하 시간기준 [가](3)항 적용

[나] 현행과 같음

개     정

1-33 전차선 가설 차단공사 할증률

표 생략

[가] 생략

[나] 단선구간 선로상 작업에 적용

[다] 생략

1-33 전차선 가설 차단공사 할증률

표 현행과 동일

[가] 현행과 동일

[나] 단선조건(단선구간, 복선구간의 상선 또는 하선)의 선로상 작업에 적용

[다] 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	1-48 기계시공 적용기준 [가] 기계장비선정 (1) ～ (2) 생 략 [나] 수 송 (1) 생 략 (2) 이동할 경우의 수송비는 다음의 자주식 기계장비의 이동 속도를 기준하여 수송비를 계상하며, 이때의 경비는 기계장비 사용료와 운전경비의 합계액으로 한다. (3) 운전사 노임 운전사(중기운전사, 운전사, 기계운전사 및 조수포함)의 노임은 상시 고용일 경우에 월전액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가액 작성준칙(재정경제부 회계예규)에 의거 계상한다. (신 설) (4) 손 료 : 유류 가격은 해당지역의 고시가격으로 한다. (5) 기타사항은 표준품셈 토목부문 제10장 (기계화시공)을 준용한다.	1-48 기계시공 적용기준 [가] 기계장비선정 (1) ～ (2) 현행과 동일 [나] 수 송 (1) 생 략 (2) 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동 속도를 기준하여 수송비를 계상하며, 이때의 경비는 기계장비 사용료와 운전경비의 합계액으로 한다. (3) 운전사 노임 운전사(건설기계운전사, 운전사, 기계운전사, 건설기계조장 및 조수포함)의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 지급함을 원칙으로 하며, 예정가격 작성기준(기획재정부 회계예규)에 의거 계상한다. (4) 기계경비의 보정 기계운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간표준 가동시간 보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료중 관리비와 운전경비중 인건비를 별도 산정할 수 있다. (5) 유류 가격은 해당지역의 고시가격으로 한다. (6) 기타사항은 표준품셈 토목부문 제10장 (기계화시공)을 준용한다.

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	1-50 기계장비의 경비 산정 [가] 용어와 정의 (1) ～ (12) 생 략 [나] 경비정산요령 (1) ～ (3) 생 략 (4) 기계장비 가격 ㈎ 기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입 기계는 달러화($)로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 3% 이상의 증감이 있을 때에는 건설 기계 가격을 조정할 수 있다. ㈏ 기계장비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다.	1-50 기계장비의 경비 산정 [가] 용어와 정의 (1) ～ (12) 현행과 동일 [나] 경비적산요령 (1) ～ (3) 현행과 동일 (4) 기계장비 가격 ㈎ 기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입 기계는 달러화($)로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 3% 이상의 증감이 있을 때에는 건설 기계 가격을 조정할 수 있다. ㈏ 기계장비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다.

구  분

현     행

개  정 (안)

비   고

개    정

1-52 운전경비 산정

장비연료 및 운전원

장비명	규격 (톤)	주연료 (L/Hr)	잡품: 주연료의 %	조종원 (인/일)	조 수 (인/일)	중기 조장
이하 “생 략”

【해 설】

①  운전경비는 주연료(잡재료 포함)와 운전원(중기조장, 조수포함) 인건비의 합계액으로 한다.

② ~ ③ 생략

④ 삽날, 타이어, 엔진유, 그리스, 넝마 등 소모율은 잡재료에 포함되었음

⑤ 중기운전사가 아닌 일반운전사가 필요시에는 조수직은 적용에서 제외

⑥ ~ ⑦ 생략

⑧ 잡재료은 시간당소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것임

※ 장비가격은 물가자료 참조

1-52 운전경비 산정

장비연료 및 운전원

장비명	규격 (톤)	주연료 (L/Hr)	잡재료: 주연료의 %	조종원 (인/일)	조 수 (인/일)	건설기계 조장
이하 “생 략”

【해 설】

①  운전경비는 주연료(잡재료 포함)와 운전원(조종원, 건설기계조장, 조수포함) 인건비의 합계액으로 한다.

② ~ ③ 현행과 동일

④ (삭  제)

⑤ (삭  제)

④ ~ ⑤ 현행과 동일

⑥ 잡재료는 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 넝마 등으로 시간당소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것이며, 삽날, 타이어의 소모율이 포함된 것임

※ 장비가격은 물가자료 참조

구  분

현     행

개  정 (안)

비   고

개    정

2-5-2 관형지지물(Tubular Steel Pole) 기계 시공

(단위：톤)

공 종	기 사	송전 전공	보통 인부	장비시간 (hr)
관형철탑	0.38	1.13	1.13	1.96

【해 설】

① ～ ⑥ 생 략

⑦ 장비는 5톤 트렉크레인 사용기준임

2-5-2 관형지지물(Tubular Steel Pole) 기계시공

(단위：톤)

공 종	기 사	송전 전공	보통 인부	장비시간 (hr)
관형철탑	0.38	1.13	1.13	1.96

【해 설】

① ～ ⑥ 현행과 동일

⑦ 장비는 5톤 트럭크레인 사용기준임

개    정

2-6-5 가설작업대 설치

“표 생략”

【해 설】

① ~ ③ 생 략

④ 손료 별도 계상

- 손료는 공기 3개월 기준

- 강관비계 체적은 가로×세로×높이×개소(2)

×체적율(%) 적용

⑤ ~ ⑥ 생 략

2-6-5 가설작업대 설치

“표 생략”

【해 설】

① ~ ③ 생 략

④ 손료 별도 계상

- 손료는 공기 3개월 기준

- 강관비계 체적은 가로×세로×높이×개소

×체적율(%) 적용

⑤ ~ ⑥ 생 략

구  분

현     행

개  정 (안)

비   고

제    정

(신   설)

2-11-7 작업받침대(써포트 지지형) 설치 및 철거

(단위 : ㎡)

구 분	규 격	단 위	수 량
강 관	Φ48.6×2.4mm	m	0.87
합 판	900×1800×12t	㎡	0.64
비 계 목	60×60mm	m	1.30
PP 로프	Φ 5	m	4.18
비 계 공	설 치	인	0.03
비 계 공	철 거	인	0.02

【해 설】

① 본 품은 케이블이 양측배열된 전력구에 작업받침대를 설치하는 일반적인 기준이며, 적용대상은 써포트에 강관을 지지할 수 있는 개소에 한 하며 편측배열 등에서는 실 설계에 의한 수량을 계상한다.

② 공구손료는 직접노무비의 3%로 계상하며, 소운반비는 포함되어 있다.

③ 소요자재의 손율은 케이블 포설시 실 공기를 고려하여 토목 또는 건축품셈의 해당 손율을 적용한다. 단, PP로프의 손율은 100%로 한다.

④ 수량산출은 전력구 바닥면적 기준임.

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	2-28-5 철탑피뢰기 설치 “표 생략” 【해 설】 ① 보통지구 기준 ② 철거는 80% (신 설)	2-28-5 철탑피뢰기 설치 “표 생략” 【해 설】 ① 보통지구 기준 ② 철거는 80% ③ 점검은 개당 송전전공 0.03인(정밀점검과 병행시행으로 지세할증 제외)
개 정	2-30-1 철탑 점검 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ⑥ 생 략 ⑦ 고배율 망원경을 이용한 전선 및 부착금 구류(스페이서, 스리브, 항공표시구 등)의 지상육안점검(부적합개소 사진촬영 포함)은 정밀점검의 10% 적용 ⑧ 점검중 즉시 조치할수 있는 간이정비 포함	2-30-1 철탑 점검 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ⑥ 현행과 같음 ⑦ 고배율 망원경을 이용한 전선 및 부착금 구류(스페이서, 스리브, 항공표시구 등)의 지상육안점검(부적합개소 사진촬영 포함)은 정밀점검의 15% 적용 ⑧ 점검중 즉시 조치할수 있는 간이정비 포함

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	2-30-4 전선 접속개소 점검 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ③ 생 략 ④ 편심측정은 전선삽입량 측정기를 사용하여 가선상태에서 편심 시공 여부 측정기준 가. Spacer 또는 Spacer damper 통과 공량 미포함(Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행시 적용 공량) 나. Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행하지 않고 편심측정만 시행시, 편심측정 개소당 Spacer 또는 Spacer damper 통과 공량, 송전전공 765kV 0.033인, 345kV 0.045인, 154kV 0.048인 추가 계상 (단도체 제외) ⑤ 66kV 송전선로 편심 측정은 2-26 이도 및 장력 관련공사 해설 ⑨항에 의거 전선의 인하 인상품 적용(별도의 편심측정품 계상 불가)	2-30-4 전선 접속개소 점검 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ③ 현행과 같음 ④ 편심측정은 전선삽입량 측정기를 사용하여 가선상태에서 편심 시공 여부 측정기준 가. Spacer 또는 Spacer damper 통과 공량 미포함(Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행시 적용 공량) 나. Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행하지 않고 편심측정만 시행시, 편심측정 개소당 Spacer 또는 Spacer damper 통과 및 반복 이동작업 공량, 송전전공 765kV 0.033인, 345kV 4도체 0.045인, 345kV 및 154kV 2도체 이하 0.154인 추가 계상 ⑤ 66kV 송전선로 편심 측정은 2-26 이도 및 장력 관련공사 해설 ⑨항에 의거 전선의 인하 인상품 적용(별도의 편심측정품 계상 불가)

구  분

현     행

개  정 (안)

비   고

개    정

3-4 단상 154kV 15MVA 변압기 설치

“표 생략”

【해 설】

① ~ ⑧ 생략

(신    설)

3-4 단상 154kV 15MVA 변압기 설치

“표 현행과 동일”

【해 설】

① ~ ⑧ 현행과 동일

⑨ 변압기 운송 후 SFRA(Sweep Frequency Response Analysis) 측정시 시험 및 조정품의 특별인부 1.75인 별도 가산

제    정

(신   설)

3-4-1 단상 154kV 15MVA 가스절연변압기 설치

(단위:BANK)

공 종	변전 전공	비계 공	특별 인부	기계 설치공	목도
본체정치 및 준비 열교환기 조립 OLTC 붙임 붓싱 설치 접속 SF6 GAS 처리 GIB 설치 내부결선 각종 부분품 조립 시험 및 조정	24.0 26.13 4.0 9.0 10.76 2.59 9.0 18.0 15.0	39.0 26.13 4.0 9.0 - - - 18.0 -	33.0 30.15 6.0 9.0 10.6 1.13 9.0 27.0 33.0	- 8.04 - - - 0.63 - 12.0 -	27.0 44.22 4.0 9.0 - - - 15.0 -
계	118.48	96.13	158.88	20.67	99.22

【해 설】

① 단상 2권선, OLTC 기준(OLTC내장형 변압기는 OLTC붙임품 제외)

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
		② 인력작업기준 ③ 3권선 변압기는 105% ④ 옥내지하에 설치시는 130% ⑤ 장비를 사용할 때는 장비사용 적용품의 35%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상 ⑥ 소운반 및 포장해체 포함 ⑦ 구내이설시는 150% ⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)
개 정	3-9 22kV 진공차단기 설치 “표 생략” 【해 설】 ① ~ ③ 생략 ④ 철거는 50%	3-9 22kV 진공차단기 설치 “표 생략” 【해 설】 ① ~ ③ 생략 ④ 철거는 50% (철거 해당분 품에 한함)
개 정	3-10 154kV급 가스차단기 설치 “표 생략” 【해 설】 ① 3상 옥외설치 기준 (신 설) (신 설) ②~④ 생략	3-10 154kV급 가스차단기 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① 3상 옥외설치 기준 ② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용 ③ 25kV는 80%, 50kV는 95% 적용 ④~⑥ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

3-11 154kV GCB(Dead Tank Type) 기계

화 설치

(단위：대)

용량	공 종	변전 전공	특별 인부	저압 케이블 전공	트럭크레인 장비 사용시간 (Hr)
“내용 생략”

【해 설】

① 생 략

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 트럭크레인)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비,수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계시공 및 기계경비 산정 적용

③ 여기서 제어용 케이블 포설   “이하생략”

④ ~ ⑥ 생략

3-11 154kV GCB(Dead Tank Type) 기계

화 설치

(단위：대)

용량	공 종	변전 전공	특별 인부	저압 케이블 전공	크레인트럭 장비 사용시간 (Hr)
“내용 현행과 동일”

【해 설】

① 현행과 동일

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 크레인트럭)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비,수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계시공 및 기계경비 산정 적용

③ 제어용 케이블 포설   “이하 현행과 동일”

④ ~ ⑥ 현행과 동일

개    정

3-12 345kV급 가스차단기 설치

“표 생략”

【해 설】

① 3ø 옥외설치 기준

② ～ ④ 생략

3-12 345kV급 가스차단기 설치

“표 현행과 동일”

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준

② ～ ④ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

3-13 345kV GCB(Dead Tank Type) 기계

화 설치

(단위：대)

용량	공 종	변전 전공	특별 인부	저압 케이블 전공	트럭크레인 장비 사용시간 (Hr)
“내용 생략”

【해 설】

① 생 략

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 트럭크레인)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비,수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계시공 및 기계경비 산정 적용

③ ~ ⑤ 생략

3-13 345kV GCB(Dead Tank Type) 기계

화 설치

(단위：대)

용 량	공 종	변전 전공	특별 인부	저압 케이블 전공	크레인트럭 장비 사용시간 (Hr)
“내용 현행과 동일”

【해 설】

① 현행과 동일

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 크레인트럭)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비,수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계시공 및 기계경비 산정 적용

③ ~ ⑤ 현행과 동일

개    정

3-17 154kV급 피뢰기

“표 생략”

【해 설】

① ~ ② 생 략

③ 66kV급은 A Type의 60%

④ ~ ⑦ 생 략

3-17 154kV급 피뢰기

“표 생략”

【해 설】

① ~ ② 현행과 동일

③ (삭 제)

③ ~ ⑥ 현행과 동일

개    정

3-39 보링접지 신설

가. ～ 라. 생 략

마. 저감제 주입 및 접지저항 측정

“표 생략”

【해 설】

① ～ ④ 생략

⑤ 이품의 전공은 가항 해설 ④번 참조

3-39 보링접지 신설

가. ～ 라. 현행과 동일

마. 저감제 주입 및 접지저항 측정

“표 현행과 동일”

【해 설】

① ～ ④ 현행과 동일

⑤ 이품의 전공은 다항 해설 ⑧번 참조

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제    정

(신    설)

3-41-1 Crane용 Trolley선 신설

(ｍ당)

강체 Trolley선	플랜트전공	보통인부
75㎟ 이하 150㎟ 〃 300㎟ 〃 500㎟ 〃 700㎟ 〃 1,000㎟ 〃 1,500㎟ 〃 저압용 핀애자 (개당) 저압용 인류애자(개당)	0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.26 0.034 0.044	0.08 0.09 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 - -

【해 설】

① 강체 Trolley선 및 동대 220V, 440V용 기준

② 소운반, 가공, 절단, 수평잡기, Clamp 및

Coupler 부침 포함

③ Support용, Bracket 제작 설치는 별도 계상

④ 철거는 50%, 이설 150%

개    정

3-50 154kV GIS 가공T/L BAY

“표 생략”

【해 설】

①~② 생략

(신    설)

(신    설)

③~④ 생략

3-50 154kV GIS 가공T/L BAY

“표 현행과 동일”

【해 설】

①~② 현행과 동일

③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용

④ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.35인 별도 가산

⑤~⑥ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-51 154kV GIS T/L상부 BUS BAY “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-51 154kV GIS T/L상부 BUS BAY “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.18인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일
개 정	3-52 154kV GIS 지중T/L BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-52 154kV GIS 지중T/L BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.22인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-53 154kV GIS T/R BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-53 154kV GIS T/R BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.43인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일
개 정	3-54 154kV GIS BUS TIE BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-54 154kV GIS BUS TIE BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.29인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-55 154kV GIS T/R상부 BUS BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-55 154kV GIS T/R상부 BUS BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 기타작업 품의 변전전공 0.24인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일
개 정	3-56 154kV GIS P.T BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~③ 생략 (신 설) (신 설) ④~⑤ 생략	3-56 154kV GIS P.T BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~③ 현행과 동일 ④ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ⑤ 전자내시경을 통한 내부점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.08인 별도 가산 ⑥~⑦ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-57 154kV GIS BUSHING 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-57 154kV GIS BUSHING 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 기타작업 품의 변전전공 0.08인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일
개 정	3-58 154kV GIS GIB BAY 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) ③~④ 생략	3-58 154kV GIS GIB BAY 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④~⑤ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-58-1 154kV GIS 내장 Line P.T 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) ③~④ 생략	3-58-1 154kV GIS 내장 Line P.T 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 50kV는 95% 적용 ④~⑤ 현행과 동일
개 정	3-58-2 154kV GIS 내장 L.A 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) (신 설) ③~④ 생략	3-58-2 154kV GIS 내장 L.A 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 50kV는 95% 적용 ④ 전자내시경을 통한 내부점검시 6)항 기타작업 품의 변전전공 0.07인 별도 가산 ⑤~⑥ 현행과 동일

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-58-3 154kV 단상 GIB 설치 “표 생략” 【해 설】 ①~② 생략 (신 설) ③~④ 생략	3-58-3 154kV 단상 GIB 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ①~② 현행과 동일 ③ 2Pole은 70%, 50kV는 95% 적용 ④~⑤ 현행과 동일
개 정	3-62-1 Cable Plug In 접속 “표(23kV) 생략” 【해 설】 ① ～ ⑤ 생 략 “표(154kV) 생략” 【해 설】 ① ～ ⑤ 생 략 ⑥ CV, XLPE케이블 적용 ⑦ 600㎟ 등 기타규격은 1200㎟의 87%적용 ⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%	3-62-1 Cable Plug In 접속 “표(23kV) 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ⑤ 현행과 동일 “표(154kV) 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ⑤ 현행과 동일 ⑥ CV, XLPE케이블 1200㎟ 적용 기준 ⑦ 1200㎟미만의 기타 규격은 87%적용 ⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%
개 정	3-63 345kV GIS CB “표 생략” 【해 설】 ① ～ ⑤ 생 략 (신 설)	3-63 345kV GIS CB “표 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 4인 별도 가산

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-64 345kV GIS Feeder 인출측 DS (ES) 설치 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ④ 생 략 (신 설)	3-64 345kV GIS Feeder 인출측 DS(ES) 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ④ 현행과 동일 ⑤ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 1인 별도 가산
개 정	3-65 345kV GIS[DS(ES)+모선] 설치 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ④ 생 략 (신 설)	3-65 345kV GIS[DS(ES)+모선] 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ④ 현행과 동일 ⑤ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 1인 별도 가산
개 정	3-119 154kV GCB 점검 “표 생략” (신 설)	3-119 154kV GCB 점검 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① 3상 점검기준 ② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용 ③ 25kV는 80%, 50kV는 95% 적용

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	3-122 DS(66kV 수동조작형) 점검 “표 생략” (신 설)	3-122 DS(66kV 수동조작형) 점검 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① 3상 점검기준 ② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용 ③ 25kV는 70% 적용
개 정	3-123 DS(66kV) 점검 “표 생략” 【해 설】 정밀점검에서 조작점검 미시행시는 제외하 며, 괄호안의 공량 적용 (신 설)	3-123 DS(66kV) 점검 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① 정밀점검에서 조작점검 미시행시는 제외 하며, 괄호안의 공량 적용 ② 3상 점검기준 ③ 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용 ④ 25kV는 70% 적용

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	4-1 콘크리트전주 인력 건주 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ③ 생 략 ④ 틀 1본 포함, 1본 추가마다 10% 가산 ⑤ ～ 생 략	4-1 콘크리트전주 인력 건주 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ③ 현행과 동일 ④ 근가 1본 포함, 1본 추가마다 10% 가산 ⑤ ～ 현행과 동일
개 정	4-2 콘크리트전주 기계건주 “표 생략” 【해 설】 ① ～ ⑨ 생 략 ⑩ 틀블럭 불포함, 틀 1본마다 전공 0.13인, 보통인부 0.26인 별도 계상 ⑪ ～ 생 략	4-2 콘크리트전주 기계건주 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① ～ ⑨ 현행과 동일 ⑩ 근가 불포함, 근가 1본마다 전공 0.13인, 보통인부 0.26인 별도 계상 ⑪ ～ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제    정

(신    설)

4-10-1 다기능 전선가선 기계화공법

(단위: 100m)

규 격	배전전공	보통인부
나경동선 14㎟이하 22㎟이하 38㎟이하 60㎟이하 100㎟이하 150㎟이하	0.08 0.13 0.21 0.30 0.43 0.52	0.04 0.06 0.10 0.15 0.21 0.26
ACSR 32㎟이하 58㎟이하 95㎟이하 160㎟이하 240㎟이하	0.24 0.35 0.51 0.62 0.71	0.12 0.17 0.25 0.31 0.36

【해 설】

① 1선당 기계작업 기준으로 연선, 긴선, 이도조정 포함

② 1조 100m 나선기준, 피복선 120%, 재사용철거 50%

③ 재사용 전선 가선 100%

④ 가로수 또는 수목과 접촉하여 작업하는 장소 100%

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

4-35 전력케이블 지중 기계포설

(단위 : ㎞)

규 격 (㎟)	단심 1공 3선		장비사용시간(Hr)
	케이블공	보통인부	윈 치
생 략 (신 설)

【해 설】

① ~ ⑭ 생 략

4-35 전력케이블 지중 기계포설

(단위 : ㎞)

규 격 (㎟)	단심 1공 3선		장비사용시간(Hr)
	케이블공	보통인부	윈 치
생 략 600	91.6	74.78	11.55

【해 설】

① ~ ⑭ 생 략

개    정

4-40 지상 설치형 변압기 기계설치

(단위 : 대)

용 량	배 전 전 공	보 통 인 부	장비사용시간 (Hr)
50㎸A 이하 100 〃 200 〃 300 〃 (신 설)	0.42 0.54 0.78 0.88	0.42 0.75 1.34 1.44	1.67 2.18 2.72 2.80

【해 설】

① ~ ⑦ 생 략

(신    설)

(신    설)

4-40 지상 설치형 변압기 기계설치

(단위 : 대)

용 량	배 전 전 공	보 통 인 부	장비사용시간 (Hr)
50㎸A 이하 100 〃 200 〃 300 〃 500 〃	0.42 0.54 0.78 0.88 0.99	0.42 0.75 1.34 1.44 1.54	1.67 2.18 2.72 2.80 2.88

【해 설】

① ～ ⑦ 현행과 동일

⑧ 동일장소에서 2대이상 동시설치시는 1대 추가

마다 80% 가산

⑨ 슬림형 1상 300kVA와 3상 500kVA 변압기는

일반형보다 1단계 하위 용량 변압기 적용

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제   정

(신    설)

4-42-1 지상기기 내부청소

공 종 명	배전전공	특별인부
지상개폐기 내부청소 (4W4S)	0.213	0.213
지상개폐기 내부청소 (3W3S)	0.175	0.175
지상변압기 내부청소 (단상)	0.127	0.127
지상변압기 내부청소 (삼상)	0.210	0.210

【해 설】

① 본 품은 절연체로 제작된 솔 등을 이용하여 활선상태의 기기내부(기초대 부분 청소포함) 및 케이블 엘보접속재에 부착된 분진 등을 제거하는 작업 으로 지상기기 외함내부 청소 2회, 엘보접속재 1회 청소 후 지상기기 내부를 완전 건조시키는 기준 임

② 내부청소 전 기기내부 이상유무, 접속재 온도측정, 접지상태 점검 포함

③ 지상기기 외함청소와 동시 시행 시 본 품의 70% 적용

④ 지상기기의 운영을 위해 추가 설치된 고장표시기, 원격감시시스템 등의 철거 및 설치 품은 별도 계상

⑤ 필요시 현장 교통정리원 별도계상(보통인부 해당공종의 공량 적용)

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제   정

(신    설)

4-68-5 지상변압기 무정전 교체공법

공 종 명	배전 활선 전공	배전 전공	장비사용시간(Hr)
			엘보분리장치, 변압기차, 케이블차	크레인 (5ton)
지상변압기 무정전 교체	2.68	2.68	5.55	2.80

【해 설】

① 용량에 관계없이 3상 지상변압기를 무정전으로 교체하는 기준

② 저압선 무정전 절체는 3상4선식(4선기준) 1호 분리ㆍ연결 품

③ 저압선 3상4선식(4선) 1호 추가시 배전전공 0.2인 추가

④ 저압선 1상2선식(2선) 1호 추가시 배전전공 0.1인 추가

⑤ 현장교통 정리원 필요시 별도계상

⑥ 특고압, 저압선 방호 포함

제   정

(신    설)

4-68-6 지상변압기 엘보접속재 활선 분리·연결

공 종 명	배전활선전공	장비사용시간(Hr) (엘보분리장치)
지상변압기 엘보접속재 활선 분리ㆍ연결	1.07	1.76

【해 설】

① 3상 지상변압기 엘보를 활선 연결ㆍ분리하는 작업 기준

② 시공 대상설비 양단의 엘보(3상)를 활선 분리ㆍ연결 시 70%

추가 계상

③ 엘보 분리 또는 연결만 작업시 상기품의 70% 계상

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

4-76 수목가지치기 작업

“표 생략”

【해 설】

① ～ ⑦  생 략

(신    설)

4-76 수목가지치기 작업

“표 현행과 동일”

【해 설】

① ～ ⑦  현행과 동일

⑧ 폐기물 처리비용 발생시 별도 계상

개    정

4-84-6 데이터베이스 구축

작 업 내 용	단위	S/W 시험사
종합배전자동화 시스템 데이터 베이스 구축	D/L	3.04

【해 설】

① 도면 및 NDIS등의 자료를 참고하여

데이터베이스를 구축하는 품임

(신 설)

② 데이터베이스 구축 후 오류검사 기능을

이용하여 입력오류를 점검하는 품 포함

③ D/L 단위의 신규 증설, 변경은 이품 적용

4-84-6 데이터베이스 구축

작 업 내 용	단위	S/W 시험사
회로도기반 직접입력 DB 구축	D/L	1.40
회로도기반 자동변환 DB 구축	D/L	1.12

【해 설】

① 도면 및 NDIS등의 자료를 참고하여 회로도기반의 데이터베이스를 구축하는 품임

② 구축방법에 따라 회로도기반 직접입력 및

자동변환 선택 적용

③ 데이터베이스 구축 후 오류검사 기능을 이용하여 입력오류를 점검하는 품 포함

④ D/L 단위의 신규 증설, 변경은 이품 적용

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제   정

(신    설)

4-87-3 자동화개폐기 투입ㆍ개방 시험

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
자동화개폐기 투입ㆍ개방 시험	대	0.2	0.3

【해 설】

① 지중용 자동화개폐기 투입ㆍ개방 시험은 이 품의 160%

② 정밀 예방점검시의 자동화개폐기 투입ㆍ개방시험은 가공용은 H/W시험사 0.02M/D,

지중용은 H/W 시험사 0.03M/D 적용

개   정

4-92-7 제어함 제어부 점검

“표 생략”

【해 설】

① ~ ② 생략

(신    설)

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부

(0.46M/D) 별도 가산

4-92-7 제어함 제어부 점검

“표 현행과 동일”

【해 설】

① ~ ② 현행과 동일

③ 정밀 예방점검시의 제어부 점검은 가공

용은 H/W 시험사 0.4M/D, 지중용은

H/W 시험사 0.64M/D 적용

④ 현장교통정리원 필요시 보통인부

(0.46M/D) 별도 가산.

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

5-1 전선관 배관

(단위:ｍ)

합성수지전선관		후강전선관		금속가요전선관
규격(㎜)	내선 전공	규격(㎜)	내선 전공	규격(㎜)	내선 전공
14 16 22 28 36 42 54 70 82 92 104 125	0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.19 0.28 0.37 0.45 0.46 0.51	- 16(½＂) 22(¾＂) 28(1＂) 36(1¼＂) 42(1½＂) 54(2＂) 70(2½＂) 82(3＂) 92(3½＂) 104(4＂) -	- 0.08 0.11 0.14 0.20 0.25 0.34 0.44 0.54 0.60 0.71 -	- 15 17 24 30 38 50 63 - - - -	- 0.039 0.049 0.063 0.077 0.091 0.13 0.15 - - - -

【해 설】

① ～ ⑦ 생략

⑧ 폴리에틸렌 전선관(CD관) 및 합성수지제 가요전선관은 합성수지 전선관 품의 80%. 다만, 지름이 100㎜ 이상의 직관은 100%

⑨ ～ ⑫ 생략

⑬ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선 1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는 별도 계상

⑭ 철거 30%, 재사용 철거 40%

5-1 전선관 배관

(단위:ｍ)

합성수지전선관		후강전선관		금속가요전선관
규격	내선 전공	규격	내선 전공	규격	내선 전공
14㎜이하 16㎜이하 22㎜이하 28㎜이하 36㎜이하 42㎜이하 54㎜이하 70㎜이하 82㎜이하 92㎜이하 104㎜이하 125㎜이하	0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.19 0.28 0.37 0.45 0.46 0.51	- 16㎜이하 22㎜이하 28㎜이하 36㎜이하 42㎜이하 54㎜이하 70㎜이하 82㎜이하 92㎜이하 104㎜이하 `	- 0.08 0.11 0.14 0.20 0.25 0.34 0.44 0.54 0.60 0.71 -	- 15㎜이하 17㎜이하 24㎜이하 30㎜이하 38㎜이하 50㎜이하 63㎜이하 - - - -	- 0.039 0.049 0.063 0.077 0.091 0.13 0.15 - - - -

【해 설】

① ～ ⑦ 현행과 동일

⑧ 폴리에틸렌 전선관 및 합성수지제 가요전선관(CD관)은 합성수지 전선관 품의 80%. 다만, 지름이 100㎜ 이상의 직관은 100%

⑨ ～ ⑫ 생략

⑬ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선 1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는 “3-38 접지공사”의 접지클램프 품 적용

⑭ 철거 30%, 재사용 철거 40%

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

5-3 박스(BOX) 설치

(단위：개)

종 별	내선전공
Concrete Box Outlet Box Switch Box (3연용이하) Switch Box (4연용이상) 노출형 Box (콘크리트 노출기준) 플로어 박스 연결용 박스	0.12 0.20 0.20 0.25 0.29 0.20 0.04

【해 설】

① ～ ③ 생 략

④ 발폭형 및 방수형 300%

⑤ ～ ⑥ 생 략

⑦ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는 별도 계상

⑧ 기타 할증은 전선관 배관 준용

⑨ 철거 30%

5-3 박스(BOX) 설치

(단위：개)

종 별	내선전공
Concrete Box Outlet Box Switch Box (2개용이하) Switch Box (3개용이상) 노출형 Box (콘크리트 노출기준) 플로어 박스 연결용 박스	0.12 0.20 0.20 0.25 0.29 0.20 0.04

【해 설】

① ～ ③ 현행과 동일

④ 방폭형 및 방수형 300%

⑤ ～ ⑥ 현행과 동일

⑦ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는 “3-38 접지공사”의 접지클램프 품 적용

⑧ 기타 할증은 전선관 배관 준용

⑨ 철거 30%

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개   정

5-7 금속덕트 설치

(단위：ｍ)

규 격 (폭×높이)	단면적	내선전공
60㎜ × 30㎜ 이하 100㎜ × 50㎜ 〃 100㎜ × 100㎜ 〃 150㎜ × 100㎜ 〃 200㎜ × 100㎜ 〃 300㎜ × 100㎜ 〃 400㎜ × 150㎜ 〃 500㎜ × 200㎜ 〃 600㎜ × 300㎜ 〃 700㎜ × 400㎜ 〃 1,000㎜ × 400㎜ 〃 (신 설)	18㎠ 50㎠ 100㎠ 150㎠ 200㎠ 300㎠ 600㎠ 1,000㎠ 1,800㎠ 2,800㎠ 4,000㎠	0.15 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60 1.50 2.00 2.50 3.00

【해 설】

① ～ ⑥ 생 략

5-7 금속덕트 설치

(단위：ｍ)

규 격 (폭×높이)	단면적	내선전공
60㎜ × 30㎜ 이하 100㎜ × 50㎜ 〃 100㎜ × 100㎜ 〃 150㎜ × 100㎜ 〃 200㎜ × 100㎜ 〃 300㎜ × 100㎜ 〃 400㎜ × 150㎜ 〃 500㎜ × 200㎜ 〃 600㎜ × 300㎜ 〃 700㎜ × 400㎜ 〃 1,000㎜ × 400㎜ 〃 1,200㎜ × 450㎜ “	18㎠ 50㎠ 100㎠ 150㎠ 200㎠ 300㎠ 600㎠ 1,000㎠ 1,800㎠ 2,800㎠ 4,000㎠ 5,400㎠	0.15 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60 1.50 2.00 2.50 3.00 3.70

【해 설】

① ～ ⑥ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개   정

5-13 제어용 케이블 설치

(단위：ｍ, 적용직종：저압케이블공)

선심수	2.5㎟ 이하	4㎟ 이하	6㎟ 이하	8㎟ 이하	10㎟ 이하
1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 10 C 12 C 14 C 19 C 24 C 30 C 50 C	0.010 0.014 0.019 0.026 0.032 0.035 0.039 0.042 0.048 0.054 0.059 0.072 0.084 0.098 0.112	0.011 0.016 0.022 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.052 0.058 0.064 (신 설) 0.078 (신 설) 0.09 - -	0.013 0.018 0.026 0.034 0.039 0.044 0.048 0.052 0.059 0.066 0.073 0.089 0.103 - -	0.014 0.020 0.029 0.039 0.044 0.050 0.054 0.058 0.067 - - - - - -	0.018 0.025 0.036 0.049 0.055 0.063 0.068 0.073 0.084 - - - - - -

【해 설】

① 다음 작업 포함기준

㈎ 동일 Level 100m이내의 Drum 소운반

㈏ 전선 Drum대 설치 및 기타 준비

㈐ Drum 해체

㈑ 케이블 부설 정돈, 청소㈎ 현행과 동일

㈒ 단자처리, 도입선 넣기, 결선, Mark 취부 포함

② ～ ⑨ 생 략

5-13 제어용 케이블 설치

(단위：ｍ, 적용직종：저압케이블공)

선심수	2.5㎟ 이하	4㎟ 이하	6㎟ 이하	8㎟ 이하	10㎟ 이하
1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 10 C 12 C 14 C 15 C 19 C 20 C 24 C 30 C 50 C	0.010 0.014 0.019 0.026 0.032 0.035 0.039 0.042 0.048 0.054 0.059 0.062 0.072 0.074 0.084 0.098 0.112	0.011 0.016 0.022 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.052 0.058 0.064 0.067 0.078 0.08 0.09 - -	0.013 0.018 0.026 0.034 0.039 0.044 0.048 0.052 0.059 0.066 0.073 0.076 0.089 0.092 0.103 - -	0.014 0.020 0.029 0.039 0.044 0.050 0.054 0.058 0.067 - - - - - - - -	0.018 0.025 0.036 0.049 0.055 0.063 0.068 0.073 0.084 - - - - - - - -

【해 설】

① 다음 작업 포함기준

㈎ 동일 Level 100m이내의 Drum 소운반

㈏ 전선 Drum대 설치 및 기타 준비

㈐ Drum 해체

㈑ 케이블 부설 정돈, 청소

㈒ 단자처리, 도입선 넣기, 결선, Mark 취부 포함

② ～ ⑨ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개   정

5-42 피뢰침 설치

“표 생략”

【해 설】

① 배선 포함, 접지 불포함

② ~ ⑤ 생략

5-42 피뢰침 설치

“표 현행과 같음”

【해 설】

① 배선(돌침에서 연결박스) 포함, 인하도선 및 접지  불포함

② ~ ⑤ 현행과 동일

개    정

5-43 자가발전기 설치

(단위：대)

발전기 용 량	설 치				시운전 및 조정
	전기 공사 기사	플랜트 전 공	기계공	특별 인부	전기공사 기사	플랜트 전 공
"생략" 1,000 kVA (신 설) (신 설) (신 설) (신 설)

【해 설】

① ～ ⑤ 생 략

5-43 자가발전기 설치

(단위：대)

발전기 용 량	설 치				시운전 및 조정
	전기 공사 기사	플랜트 전 공	기계공	특별 인부	전기공사 기사	플랜트 전 공
"현행과 동일" 1,000 kVA 1,250 〃 1,500 〃 1,750 〃 2,000 〃	52.5 54.2 55.9 57.6 59.3	24.2 26.3 28.0 29.7 31.4	24.2 26.3 28.0 29.7 31.4	10.5 11.6 11.6 11.6 12.8	11.6 12.8 12.8 14.1 14.1	11.6 11.6 12.8 12.8 14.1

【해 설】

① ～ ⑤ 현행과 같음

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

5-44 태양광 발전시스템 설치

품 명	규 격	단 위	플랜트전공
태양전지판	50W이하 75W이하 100W이하 (신 설)	매 “ “	0.17 0.20 0.25
전력조절기	(생 략)
인 버 터	(생 략)

【해 설】

① ～ ④ 생 략

⑤ 태양전지판 100W초과 시는 매 초과 50W당 0.05인씩 가산

⑥ 생 략

5-44 태양광 발전시스템 설치

품 명	규 격	단 위	플랜트전공
태양전지판	50W이하 75W이하 100W이하 175W이하	매 “ “ “	0.17 0.20 0.25 0.35
전력조절기	(현행과	동일)
인 버 터	(현행과	동일)

【해 설】

① ～ ④ 현행과 같음

⑤ 태양전지판 175W초과 시는 매 초과 50W당 0.05인씩 가산

⑥ 현행과 같음

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	5-46 교통신호등 설치 가) 교통신호등 설치 “표 생략” 【해 설】 ① 차량철주 및 보행등주는 재질에 관계 없이 적용하며, 터파기, 되메우기, 기초설치는 별도 적용 ② 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용 ③ 차량철주 Φ250 × 8m 초과는 본 품의 140% 적용 ④ ～ ⑩ 생 략	5-46 교통신호등 설치 가) 교통신호등 설치 “표 현행과 동일” 【해 설】 ① 차량철주 및 보행등주는 재질에 관계 없이 적용하며, 터파기, 되메우기, 기초설치는 별도 적용 ② 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용 ③ 차량철주 Φ200 × 8m 초과는 본 품의 140% 적용 ④ ～ ⑩ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제    정

(신 설)

7-24-1 강관 빔 설치

종별	단위	조립			설치			접합체
		배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)	배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)	배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)
강관형1단 2선용	본	-	0.10	-	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
“ 3선용	“	0.10	0.21	30	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
“ 4선용	“	0.12	0.23	30	0.12	0.13	35	0.77	0.03	57
“ 5선용	“	0.29	0.43	60	0.12	0.13	35	0.94	0.03	72
강관형2단 6선용	“	0.93	1.16	60	0.15	0.15	40	1.44	0.03	104
“ 7선용	“	1.41	1.65	60	0.15	0.15	40	1.66	0.06	104
“ 8선용	“	1.62	1.88	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
“ 9선용	“	1.77	2.03	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
“ 10선용	“	1.89	2.17	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104

【해설】

① 빔 1본 설치 후 다음 장소로 이동 및 도착기준

② 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

③ 빔 조립시 철재류 운반비 별도 계상

④ 기계장비는 강관형 1단 5선용까지 오가크레인 4톤, 강관형 2단 6선용 이상 크레인트럭 25톤 사용기준

⑤ 기계장비를 공사현장까지 왕복수송시 운전원, 조수 및 연료비는 별도 계상

⑥ 철거는 60%이며 장비사용시간은 100%

⑦ 강관전주와 접합되는 양단의 접합체를 포함하며, 한쪽만 설치시 본품의 50% 적용

⑧ 조립시 목재거치대 설치 포함, 재료분리 및 장비대기시간 포함

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

7-27 하수강 설치

“표 생략”

【해설】

철거는 60%

7-27 하수강 설치

“표 현행과 동일”

【해설】

① 2선용 180%, 3선용 260%

② 강관용 80%

③ 하수강 수평 및 비틀림 등 조정 20%

④ 철거는 60%

개    정

7-31 가동브래키트 설치

(단위 : 본)

종 별	배전전공	보통인부
교류 일반용	1.1	0.6
교류 평행틀(2본)	1.8	1.2
교류 평행틀(3본)	2.5	1.8

【해설】

① 게이지 표준을 3.0m로 하고, 3.5m이상은 30% 증

② 곡선당김 및 진동방지 철물붙임은 별도가산

③ 애자포함

④ 철거는 신설의 60%

⑤ 현장가공품은 별도계산

⑥ 열차운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑦ 터널 브래키트는 교류 일반용 적용(지지금구

류 설치품 포함)

(신 설)

(신 설)

7-31 가동브래키트 설치

(단위 : 본)

종 별	배전전공	보통인부
교류 일반용	1.1	0.6
교류 평행용(2본)	1.8	1.2
교류 평행용(3본)	2.5	1.8

【해설】

① 게이지 표준을 3.0m로 하고, 3.5m이상은 130%

② 곡선당김금구 및 진동방지 철물붙임은 별도가산

③ 애자포함

④ 철거는  60%

⑤ 현장가공품은 120%

⑥ 열차운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑦ 터널 브래키트는 교류 일반용 적용(지지금구류

설치품 포함, 지지금구 볼트매입은 별도 계상)

⑧ 높이 조정은 20%

⑨ 터널브래키트 지지금구 볼트매입은 별도 계상

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제    정

(신 설)

7-31-1 평행틀 설치

(단위 : 본)

종 별	배전전공	보통인부
평행틀 설치	0.42	0.55

【해설】

① 평행틀 높이, 수평 및 비틀림 등 조정은 20%

② 철거는 60%

개    정

7-32 곡선당김장치 설치

"표 생략"

【해설】

① 「심플」로서 조가선과 전차선을 같이 당길때는「콤파운드」적용

② 진동방지장치는 심플 적용

③ 현장 제작 가공시는 별도 계상

④ 철거는 60%

(신 설)

(신 설)

7-32 곡선당김장치 설치

"표 현행과 동일"

【해설】

① 「심플」로서 조가선과 전차선을 같이 당길때는「콤파운드」적용

② 진동방지장치는 심플 적용

③ 현장 제작 가공시는 120%

④ 철거는 60%

⑤ 곡선당김금구는 심플 적용

⑥ 애자설치는 별도 계상

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

7-39 행거 및 드롭바 교체

(단위 : 본)

종 별		배전전공	보통인부
심플	드 롭 바	0.046	0.046
	행 거	0.016	0.016
콤파운드	드 롭 바	0.046	0.046
	행 거	0.016	0.016

(신 설)

(신 설)

7-39 행거 및 드롭바 설치

(단위 : 본)

종 별		배전전공	보통인부
설 치	드 롭 바	0.029	0.029
	행 거	0.01	0.01
교 체	드 롭 바	0.046	0.046
	행 거	0.016	0.016

【해설】

① 균압용 드롭바는 120%

② 철거는 60%

개    정

7-42 흐름방지장치 설치

"표 생략"

【해설】

(신 설)

① 철거는 30%(애자포함)

7-42 흐름방지장치 설치

"표 현행과 동일"

【해설】

① 조정은 20%

② 철거는 30%(애자포함)

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	7-43 균압선 설치 "표 생략" 【해설】 ① 접속점 2개를 표준으로 하며 접속점 1개 증가마다 30% 가산 (신 설) ② 철거는 60% ③ 개가는 설치 + 철거	7-43 균압장치 설치 "표 현행과 동일" 【해설】 ① 접속점 2개를 표준으로 하며 접속점 1개 증가마다 30% 가산 ② 조정은 20% ③ 철거는 60% (삭 제)
개 정	7-44 교차 및 수평철물 설치 "표 생략" 【해설】 (신 설) 철거는 60%	7-44 교차 및 수평장치 설치 "표 현행과 동일" 【해설】 ① 조정은 70% ② 철거는 60%

구 분	현 행	개 정 (안)	비 고
개 정	7-45 구분장치 설치 "표 생략" 【해설】 ① ~ ⑤ 생략 (신 설)	7-45 구분장치 설치 "표 현행과 동일" 【해설】 ① ~ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 조정 및 부속품 교체는 20%
개 정	7-52 급전선 인류 설치 "표 생략" 【해설】 ① ~ ② 생략 (신 설)	7-52 급전선 인류 설치 "표 현행과 동일" 【해설】 ① ~ ② 생략 ③ 보호선(PW, FPW 등)은 기타품의 50% 적용
개 정	7-54 애자 설치 "표 생략" 【해설】 ① ~ ④ 생략 ⑤ 애자닦기 (가) 생략 (신 설) (신 설) (나) 주상(탑상) 기계닦기 : 기계손료만 계상(인건비 포함) (다) 발취 손닦기는 신설품의 170% (신 설) ⑥ ~ ⑦ 생략	7-54 애자 설치 "표 현행과 동일" 【해설】 ① ~ ④ 현행과 동일 ⑤ 애자닦기 (가) 현행과 동일 (나) 모터카 상부 손닦기 : 신설품의 30% (다) 모터카 상부(탑상) 손닦기 : 신설품의 50% (라) 주상(탑상) 기계닦기 : 기계손료만 계상(인건비 포함) (마) 발취 손닦기는 신설품의 170% (바) 터널브래키트 구리스 도포 : 장간애자 신설품의 30%(모터카 상부 작업기준) ⑥ ~ ⑦ 현행과 동일

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

개    정

7-56 전주방호책 설치

"표 생략"

【해설】

① 용수있는 곳은 30% 증

② 콘크리트 기초시공 및 흙파기 품 포함

(신 설)

(신 설)

7-56 전주방호책 설치

"표 현행과 동일"

【해설】

① 용수있는 곳은 130%

② 콘크리트 기초시공 및 흙파기, 되메우기, 잔토처리 품 포함

③ 볼트매입형은 본품의 60%를 적용하고 볼트매입품 별도 계상

④ 철거는 30%(기초 철거는 별도계상)

제    정

(신 설)

7-60-1 전철주 RL 표시

(단위 : 개소)

종 별	보통인부	비 고
RL 표시	0.07

【해설】

① 페인트 사용 기준

② 강관주 RL 표시는 120%

③ H형 강관주 RL표시는 본품 적용

④ 번호표 제작 부착시 별도 계상

구  분

현     행

개  정 (안)

비 고

제    정

(신  설)

7-60-2 전차선로용 피뢰기 설치

(단위 : 대)

종 별		배전전공	보통인부
피뢰기	소운반, 포장해체 및 설치준비	0.65	0.65
	본체 설치	0.34	0.34
	시험 및 조정	0.24	0.10

【해설】

① 교류 전차선로용 66kV 기준

② 폴리머형은 80%

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

④ 가대는 별도가산

제    정

(신  설)

7-60-3 전차선로용 볼트,너트 교체

(단위 : 개)

종 별	배전전공	보통인부
볼트,너트 교체	0.02	-

【해설】

① 전철보수장비 상부 작업 기준

② 승, 하주 작업은 150%

Ⅱ. 직종 변경 공종

1. 중기운전기사 ☞ 건설기계운전기사

항목번호	항 목 명
7-18	전철주 기초 기계설치

2. 목공 ☞ 형틀목공

항목번호	항 목 명
7-17	콘크리트주 기초 설치

3. 목도공 ☞ 목도

항목번호	항 목 명
3-1	22kV 변압기 설치
3-2	66kV 변압기 설치
3-3	154kV 변압기 설치
3-4	단상 154kV 15MVA 변압기 설치
3-5	단상 345kV 100MVA 변압기 설치
3-6	154kV 3상 30/40MVA FOW형 변압기 설치
3-7	애자형 변류기 설치
3-8	애자형 계기용 변압기 및 C.P.D 설치
3-8-1	22kV 탱크형 계기용 변압기 설치
3-9	22kV 진공차단기 설치
3-28-1	3상 345kV 100MVAR 분로리액터 설치

4. 보링공 ☞ 보링공(지질조사)

항목번호	항 목 명
3-39 다	기계기구 설치
3-39 라	보링(천공)

5. 송전활선공 ☞ 송전활선전공

항목번호	항 목 명
2-20	애자청소 및 보수공사 (2-20-4)

6. 기사 ☞ 전기공사기사

항목번호	항 목 명
2-5	철탑기초각입 (2-5-1, 2-5-2, 2-5-3)
2-6	철탑공사 (2-6-1, 2-6-2, 2-6-3, 2-6-4, 2-6-5)
2-8	송전선로 가선 (2-8-1, 2-8-2, 2-8-3, 2-8-6)
2-9	가공지선 가선
2-10	지중 송전선로 측량 (2-10-2)
2-11	지중케이블 설치 (2-11-2, 2-11-3, 2-11-4, 2-11-5, 2-11-6)
2-12	OF 케이블 직선접속
2-13	OF 케이블 종단접속
2-14	OF 케이블 유지접속
2-15	지중 XLPE 케이블 직선접속
2-15-1	지중 XLPE 케이블 조립식접속
2-16	지중 XLPE 케이블 종단접속
2-17	OF 케이블 급유장치 설치
2-19	케이블 준공시험
2-24	철탑 보강
2-26	이도 및 장력조정
2-28	부속설비 설치 (2-28-6)
2-31	지중선로 순시 및 점검 (2-31-4, 2-31-5, 2-31-8, 2-31-10, 2-31-11)
2-32	지중송전설비 정비 (2-32-1, 2-32-2)
2-33	전력구 부속설비 점검 및 정비 (2-33-3, 2-33-6)
2-34	지중 송전선로 방재시설공사 (2-34-3)
3-62-2	154kV GIS 1200㎟ CV 케이블 포설
8-6	진입등 시스템 설치
8-9	비행 점검

7. 용접공 ☞ 용접공(일반)

항목번호	항 목 명
3-30	철재류 가공 및 조립
3-31	Checkered Plate 제작설치
7-1	매입전 설치
7-6	AI강체 (T-Bar) 용접
7-7	Expansion Joint (평행개소 균압) (7-7(가))
7-12	긍선용 End Approach 설치

8. 화약공 ☞ 화약취급공

항목번호	항 목 명
2-2	송전선로 심형기초 굴착 (2-2-2, 2-2-3)

9. 케이블공 ☞ 케이블전공

항목번호	항 목 명
4-28	조가선 설치
4-34	전력케이블 설치
4-80	배전 지중선로 맨홀청소 및 점검

10. 저압케이블공 ☞ 저압케이블전공

항목번호	항 목 명
4-68-1	무정전장비사용 변압기공법 (해설 ⑨)
5-12	언더카페트 케이블(전력용 후래트 케이블) 설치
5-13	제어용 케이블 설치
5-14	600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 평형(VVF) 설치
5-15	600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 원형(VVR) 설치

11. 특고케이블공, 케이블전공 ☞ 특고압케이블전공

항목번호	항 목 명
3-49	22.9kV GIS CABLE(PLUG형) 단말처리
4-27	22.9kV 가공케이블 설치

12. 활선전공 ☞ 배전활선전공

항목번호	항 목 명
4-62-1	직접활선 장비사용 가공지선 설치
4-68-1	무정전 장비사용 변압기공법
4-68-2	무정전 장비사용 바이패스 케이블공법
4-68-3	무정전 장비사용 공사용개폐기공법
4-68-4	가지지 장치를 이용한 직선주 무정전공법

13. 내선전공 ☞ 배전전공

항목번호	항 목 명
4-79	도입선 넣기

14. H/W기사 ☞ H/W시험사

항목번호	항 목 명
3-126	집중감시반 보통점검 및 정밀점검

15. S/W기사 ☞ S/W시험사

항목번호	항 목 명
3-126	집중감시반 보통점검 및 정밀점검

16. 1급측량사, 측량 및 지형공간 정보기사 ☞ 시공측량사

항목번호	항 목 명
8-2	철재홀 설치
8-6	진입등 시스템 설치

17. 2급측량사, 측량 및 지형공간 정보산업기사 ☞ 시공측량사 조수

항목번호	항 목 명
8-2	철재홀 설치
8-6	진입등 시스템 설치